Gericht
OGH
Rechtssatznummer
RS0134215
Entscheidungsdatum
25.11.2025
Geschäftszahl
6Ob136/22a; 4Ob200/24a
Norm
ABGB § 1168
ÖNorm B 2110 idF 2013
Rechtssatz
Die Folgen der COVID-19-Pandemie (Mehrkosten am Bau) sind bei Anwendung der ÖNORM B 2110 grundsätzlich der Sphäre des Auftraggebers zugewiesen. Für die Behauptungslast gilt § 1168 Abs 1 ABGB.
Entscheidungstexte
TE OGH 2022-12-21 6 Ob 136/22a
TE OGH 2025-11-25 4 Ob 200/24a
Beisatz: Eine reine Preiserhöhung ohne Leistungsänderung im Verhältnis zwischen den Parteien des Werkvertrags ist von Pkt 7 der ÖNORM B 2110 nicht gedeckt, s dazu RS0142777. (T1)
Beisatz: Hier: behauptete außergewöhnliche Preissteigerungen am Stahlmarkt aufgrund des Ukraine-Kriegs. (T2)
European Case Law Identifier
ECLI:AT:OGH0002:2022:RS0134215